Author: marisete
Last saved by: LICITACAO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 109/2020, CUJO ESCOPO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO AMANHÃ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA THAIS SALTON GNOATO.

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, o Sr. GERSON LUIZ BICEGO, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 2574161-6 SESP/MT e CPF/MF sob o n.º 811.948.629-34, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado a empresa THAIS SALTON GNOATO EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.254.689/0001-83, estabelecida a Rua das Turmalinas, nº 1983, sala 01, Bairro Loteamento Industrial, cidade de Sorriso, estado do Mato Grosso, neste ato representada pela Sra. THAIS SALTON GNOATO, portadora da cédula de identidade RG n.º 1130711-0 SESP/MT e CPF/MF n.º 011.068.651-97, doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 176/2006 e, considerando o resultado da TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020 para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, firmam o presente ADITIVO, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogação de prazo do contrato n.º 109/2020 e aditivo de prazo de execução da obra, conforme justificativa e requerimento apresentados pelo Departamento de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:
	
(...)
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS:
5.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de execução da obra que será acrescido de 78 (setenta e oito) dias, passando assim o prazo de execução para 318 (trezentos e dezoito) dias, contados a partir do dia 28/05/2020 à 11/04/2021.

5.2. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de vigência do contrato que será de 78 (setenta e oito) dias, passando assim o prazo de vigência do dia 17/04/2021 à 01/07/2021. 

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 109/2020, firmado em 17 de Abril de 2020.

CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA
4.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso - MT, 21 de Janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE SORRISO MT GERSON LUIZ BICEGO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO | | THAIS SALTON GNOATO EPP THAIS SALTON GNOATO CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

_________________________________	           	_____________________________
NOME: ROB EDSON L. DA SILVA 			NOME: MARISETE M. BARBIERI
CPF: 653.136.902-72		   			CPF: 651.470.061-68

Av. Porto Alegre, n°2525, Centro–Sorriso/MT–CEP: 78890-000 | Tel.:(66) 3545-4700