Author: marisete
Last saved by: NATHALIA BUFFON

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 013/2021, CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO SOBRE RIO CELESTE – ESTRADA SODEMA E ESTRADA RODEIO EM SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, de um lado o MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENEZIO LAFIN, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 607.903 SSP/MT e CPF/MF sob o n.º 411.319.161.15, doravante denominado “CONTRATANTE”, e do outro lado a empresa KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 97.541.878/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 13.429.681-8, estabelecida a Rua Doutor Ari Luiz Brandão n.º 1184, Bairro Nova Prata, cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, telefone (66)3545-6700 e e-mail vendas@kadre.com.br, neste ato representada pela Sra. Patrícia de Rossi, portadora do CIRG n.º 1562280-0 SSP/MT e CIC n.º 020.777.511-77, doravante denominada “CONTRATADA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas modificações e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do TOMADA DE PREÇOS n.º 023/2020, firmam o presente Instrumento Contratual obedecido às condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto deste termo de aditivo, prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 013/2021, nos termos do artigo 57, da Lei n.º 8.666/93 e cláusulas quinta, conforme justificativa apresentada pela Contratada e requerimento apresentados pelo Departamento de Engenharia, bem como em consonância com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
2.1. Assim, ficam alteradas as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.1. Atribui-se ao presente contrato o novo prazo de execução da obra que será acrescido de 30 (trinta) dias, passando assim o prazo de execução para 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 11/05/2021 à 10/06/2021.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 013/2021, firmado em 25 de Janeiro de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA
4.1. E, para constar, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelos contratantes assinado, na presença de duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e efeito, de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Sorriso - MT, 10 de Maio de 2021.

MUNICÍPIO DE SORRISO MT ARI GENÉSIO LAFIN PREFEITO MUNICIPAL | | KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA PATRÍCIA DE ROSSI CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

__________________________________	   __________________________________
NOME: ROB EDSON L. DA SILVA		   NOME: ARIOSVALDO DO N. JUNIOR
CPF: 653.136.902-72			                CPF: 651.470.061-68

Av. Porto Alegre, n°2525, Centro–Sorriso/MT–CEP: 78890-900 | Tel.:(66) 3545-4700